ПАСПОРТ	
регионального проекта	
«Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры"»	
1. Общие положения	
Ответственный исполнитель	Департамент культуры Брянской области,
Департамент строительства Брянской области	
Период реализации	Срок реализации: 2024 - 2030 годы	
Связь с государственной программой	Развитие культуры и туризма в Брянской области	

2. Показатели регионального проекта	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения показателей 1

	Ответственный за достижение показателя	Информационная система	
1	2	3	4	5	6	7	
Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	
1	Строительная готовность объектов культуры	Процент	2022 год - 14	2023 год - 25;
2024 год - 100;
2025 год - 0;
2026 год - 0;
2027 год - 0;
2028 год - 0;
2029 год - 0;
2030 год - 0	Департамент культуры Брянской области	ЕИС "Закупки"	

2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам	На конец текущего
финансового года	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	
1	Строительная готовность объектов культуры	Процент					100	

3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта	
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата)	
1	2	3	4	5	6	7	
Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	
1	Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений культуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры учреждений культуры	Единица	2023 год - 0.00	2024 год - 0.00;
2024 год - 1.00;
2025 год - 0.00;
2026 год - 0.00;
2027 год - 0.00;
2027 год - 2.00;
2028 год - 0.00;
2029 год - 0.00;
2030 год - 0.00	

4. Финансовое обеспечение 	
Наименование , наименование мероприятия (результата)	2024	2025	2026	Всего	
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры"	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Местные бюджеты					
   Внебюджетные средства					
   Средства ТФОМС Брянской области					
Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Средства ТФОМС Брянской области	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. План реализации регионального проекта	
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего
документа	Информационная система (источник данных)	
1	2	3	4	5	
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	
1. Завершено строительство (реконструкция) объектов учреждений культуры	
1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на осуществленеие капитальных вложений в объекты капитального строительства	01.03.2024	Давиденко А.М., Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области	Соглашение	ГИС ЭБ Брянской области	
1.2. Заключен контракт на строительство (реконструкцию) объектов учреждений культуры	30.04.2024	Давиденко А.М., Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области	Контракт	ЕИС "Закупки"	
1.3. Произведена приемка выполненных работ	02.12.2024	Давиденко А.М., Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области	Акт выполненных работ	ЕИС "Закупки"	
1.4. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	30.12.2024	Давиденко А.М., Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области	Акт ввода в эксплуатацию	ЕИС "Закупки"	
1.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения	30.12.2024	Давиденко А.М., Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области	Отчет 	ГИС ЭБ Брянской области	
1.6. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	31.12.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного заказчика	
1.7. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.12.2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного заказчика	
1.8. Земельный участок предоставлен заказчику	01.12.2026	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Договор	Документы государственного заказчика	
1.9. Контракт на строительно- монтажные работы заключен	01.04.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок	
1.10. Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного заказчика	
1.11. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2027	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного заказчика