ПАСПОРТ	
регионального проекта	
«Региональный проект "Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области"»	
1. Общие положения	
Ответственный исполнитель	Департамент строительства Брянской области	
Период реализации	1 этап: 2024 - 2030 годы
	
Связь с государственной программой	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области	

2. Показатели регионального проекта	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения показателей 1

	Ответственный за достижение показателя	Информационная система	
1	2	3	4	5	6	7	
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры	
1	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области	Километр		2025 год - 0,1714;
2026 год - 12	Департамент строительства Брянской области	Региональная информационная система	

2.1. Поквартальный план достижения показателей регионального проекта в текущем финансовом году	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам	На конец текущего
финансового года	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры	
1	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области	Километр	0,00	0,00	0,00	0,23	0,2254	

3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта	
№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата)	
1	2	3	4	5	6	7	
Задача комплекса процессных мероприятий: Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры	
1	Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Реализованы мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры	Единица	2023 год - 12.00	2024 год - 1.00;
2025 год - 1.00;
2026 год - 3.00	

4. Финансовое обеспечение 	
Наименование , наименование мероприятия (результата)	2024	2025	2026	Всего	
Региональный проект "Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Местные бюджеты					
   Внебюджетные средства					
   Средства ТФОМС Брянской области					
Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
   Средства ТФОМС Брянской области	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. План реализации регионального проекта	
Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего
документа	Информационная система (источник данных)	
1	2	3	4	5	
Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры	
1. Завершено строительство (реконструкция) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области	
1.1. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	01.04.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика	
1.2. Контракт на строительно- монтажные работы заключен	01.05.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок	
1.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2024	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика	
1.4. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	01.04.2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика	
1.5. Контракт на строительно- монтажные работы заключен	01.05.2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок	
1.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2025	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика	
1.7. Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	01.04.2026	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Заключение	Документы государственного (муниципального) заказчика	
1.8. Контракт на строительно- монтажные работы заключен	01.05.2026	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Контракт	Единая информационная система в сфере закупок	
1.9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	31.12.2026	Захаренко Евгений Николаевич, директор Департамента строительства Брянской области	Разрешение	Документы государственного (муниципального) заказчика